투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청[남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사]

1. 설비부-8610(2015.7.16.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행하는 『남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사』에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 가로등주외 17종 구매(남부순환로 구조개선공사)

나. 계약내용

납품요구번호	품 명	수량	계약금액 (원)	계약자	납 품 기 한		식별번호
					변경전	변경후
12-14-2-39717-00	가로등 자동점멸기 (분전함감시기)	5개	19,995,000	거명 하이텍	2015.7.30	2015.10.31	22328462
	가로등 자동점멸기 (회로감지기)	20개	5,980,000				22328463

다. 연기사유 : 선행공정(토목) 지연으로 인한 설치 시기 미도래

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김현욱		환경설비과장	유병기		설비부장	07/22 박기형
협조자	경리과장	박환
시행	설비부-8844	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 무교동 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8621	/전송	02-3708-8659	/	hyunkim@seoul.go.kr	/	대시민공개