문서번호	정보시스템담당관-8332
결재일자	2015.7.22.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정보자원관리팀장	정보시스템담당관
김광중		현창기	전결 07/22 서병철
협조
	주무관		김선애

- 2015년 서울시 공통행정시스템 통합 유지보수 사업 -

주 간 업 무 보 고

(2015.07.12.~2015.07.18, 20주차)

2015. 7.

정 보 기 획 관

(정보시스템담당관)

『 2015년 서울시 공통행정시스템 통합 유지보수 사업 』

주간업무 보고

(2015.07.12. ~ 2015.07.18.)

『2015년 서울시 공통행정시스템 통합 유지보수』사업 주간업무(20주차) 보고입니다(계약번호 : 20150318153).

Ⅰ		사업개요

사업기간 : 2015. 3. 1. ~ 2015. 12. 31.

*********************

*******************

과업개요

❍ 기 운영하고 있는 공통행정시스템(31종)에 대한 유지보수

❍ 공통행정시스템 기능개선 및 보완개발

❍ 공통행정시스템 보급·공동활용 지원 및 운영체계 개선

❍ 기반 소프트웨어(미들웨어, 검색엔진 등) 및 개발 플랫폼 유지보수

Ⅱ		주간업무 보고

추진실적(20주차)

❍ 추진기간 : 2015. 7. 12. ~ 2015. 7. 18.

❍ 투입현황 : 총 57M/M중 24.89M/M(이전 : 23.29M/M)

❍ 유지보수 처리실적

구분	과업 요청(건수)		과업 완료(건수)		전체 처리 비율(%)	처리 비율(%)
	총누계	요청	총누계	처리
********	686	26	685	25	****	****
*******	2	*	2	*	*****	*****
*******	97	3	96	2	****	****
**********	37	5	37	5	*****	*****
*	***	**	***	**	****	****

사업 진척도

❍ 추진기간 : 2015. 7. 12. ~ 2015. 7. 18.

연번	구분			추진기간	단계	진척율		차주 계획	비고
						계획	실적
1	통합 유지보수			‘15.03.01.~12.31.	유지관리	46%	46%	48%
2	서비스수준협약 체결			‘15.04.01.~04.30.		100%	100%	100%
3	기능개선	일정관리시스템		‘15.04.01.~06.30.	개발	100%	100%	100%	전체일정 4.1.~11.30.
4		시민표창관리시스템		‘15.06.15.~09.30.	분석	20%	18%	24%
5		방문민원 온라인화(3종)		‘15.06.22.~09.30.	분석	20%	18%	28%
6		품질시험관리시스템		‘15.05.18.~06.30.	개발	100%	100%	100%
7	시스템 정기점검			‘15.03.01.~12.31.	유지관리	46%	46%	48%
8	기타		인터넷민원신청및증명발급시스템(GPKI모듈 : 멀티브라우저 적용)	‘15.04.13.~04.24.	개발	100%	100%	100%	적용테스트 4.27.~5.1.

※ [붙임] 상세 추진실적 및 금주 계획 참조

붙 임 : 1. 상세 추진실적 및 금주 계획 1부.

2. 주간업무 현황보고서 1부.

3. 유지보수 대장 1부.

4. 유지보수 산출물 1부.  끝.