투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	슬러지재활용과장
(경유)
제 목	(납기)변경계약 체결 알림-기타도막방수제(분뇨처리장 유입저류조 증설공사)

슬러지재활용과-5489(2015.07.20)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약을 체결하였음을 통지합니다.

가. 계약건명 : 관급자재구매(기타도막방수제-분뇨처리장 유입저류조 증설공사)

나. 계약금액 : 금103,840,500원(금일억삼백팔십사만오백원)

(조달수수료 별도 : 금560,730원)

다. 계 약 일 : 2014년  12월  24일

라. 납품기한 : 39일 연장

- 변 경 : 2015년  09월  25일

- 당 초 : 2015년  08월  17일

마. 변경사유 : 사용시기 미도래

바. 계약업체 : 티오켐(주) (대표 노창섭)

(☎ 063-291-7750)

붙임 : 분할납품요구및통지 1부.  끝.

	관리과장
주무관	정은경		관리과장	07/22 한병연
협조자
시행	관리과-9815	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동,중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	pandw1@seoul.go.kr	/	대시민공개