투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서초구청장(도로과장)
(경유)
제목	서초보금자리 보도육교 설치관련 의견 회신

1. 서초구 도로과-9022호(2015. 6.16.) 관련입니다.

2. 강남순환 도시고속도로 건설사업은 2016.5월 개통을 목표로 추진중이며, 위 공사는 현재 절대공기 부족으로 야간공사 등 돌관공사중으로 귀 구에서 양재대로를 횡단(LH서초아파트 ~ 우면2지구)하는 보도육교를 설치할 경우 본선 교량 강교 거치 시에 아래와 같은 문제점이 있어 강교 거치 작업 이후에 보도육교 설치 공사가 가능함을 알려드리니

3. 현장여건 변동으로 인한 공정 차질이 발생하지 않도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 문제점

- 보도육교 계단에 강교 거치 장비 간섭으로 강교 거치 불가

- 산책로 선행 작업 시 강교 지조립장 사용 불가

- 강교 박스 거더와 보도육교 이격거리 1.1m로 강교 거치 작업시 시설물 간 충돌 발생 우려

나. 협조사항

- 보도육교 기초작업은 가능하나 구조물공사는 2015.12월 본선 교량 강교 거치 이후 공사 가능하니 적극 협조 바람.

붙임 : 도면 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김구		도시고속도로과장	명경출		토목부장	07/22 노우성
협조자	주무관	장종환
시행	토목부-15130	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8667	/전송	02-3708-2599	/	neuf@seoul.go.kr	/	대시민공개