투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	주식회사 고황 대표 정삼술 귀하
(경유)
제목	실정보고사항 검토결과 통보

1. 고황 창동 15071401(2015. 7. 21)호와 관련입니다

2. 귀사에서 시공 중에 있는 『창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사』의 실정보고 사항에 대한 검토 결과를 아래와같이 통보 하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라오며, 변경 사항에 대하여는 추후 설계변경 시 반영 조치 하시기 바랍니다.

가. 검토결과

- 벽체 표면보수건 : 현장여건에 부합되는 제품(리코)으로 당초 설계에 반영된 물량 시공

- 그릴창 및 안전유리 등 : 귀사에서 보고한 내용대로 그릴창 추가설치 및 안전유리 등 감 조치

- 신설통로구간 천정 : 기존통로에 설치된 제품과 동일 재질의 제품으로 천정선에 맞게 설치.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
★주무관	김영원		시설보수과장	전결 07/22 정재현
협조자
시행	시설보수과-6132	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번2동(보건소길 2 ) 365-1	/	www.seoul.go.kr
전화	02-944-5455	/전송	02-945-5073	/	ywk2601@seoul.go.kr	/	대시민공개