문서번호	도로보수과-7308
결재일자	2015.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		07/22 이규철
협 조
	주무관		이상하

2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제6차)

2015.  07. 22(수)

서부도로사업소

(도로보수과)

2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제6차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2015. 03. 03. ~ 2015. 12. 31.

○ 시 공 사 : 홍기건설산업(주) 대표 안순배

○ 도 급 비 : 446,352,730원

□ 작업완료 보고

○ 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제6차)

○ 작업위치 : 마포구 서강초교 교차로 등 33개소

○ 작업기간 : 2015. 06. 10. ~ 2015. 07. 20.

○ 공사금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	71,963천원	94,130천원	증) 22,167천원
관급자재	66,573천원	89,428천원	증) 22,855천원

○ 작업내역

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
1	마포구 서강초교(보) 교차로	25m	23m	감) 2m	현장 여건변화로 물량변동
2	마포구 마포로 78 (마포동 293-1)	209m	172m	감) 37m	현장 여건변화로 물량변동
3	마포구 홍대입구역 교차로	1,388m	1,517m	증) 129m	주변 노면 퇴색으로 작업수량 증가
4	마포구 연남치안센터(남→서)	33m	33m	-

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
5	마포구 마포소방서(북→동)	24m	24m	-
6	용산구 원효산호아파트(서→북)	24m	24m	-
7	용산구 용산경찰서(남→서)	33m	33m	-
8	용산구 세계일보 (서→북)	55m	55m	-
9	서대문구 남가좌삼성아파트(남→서)	48m	48m	-
10	서대문구 백련교 (서→북)	55m	55m	-
11	서대문구 북가좌삼호아파트(동→남,서→북)	48m	48m	-
12	서대문구 홍연2교(남→서)	24m	24m	-
13	은평구 증산3교 (동→남)	24m	24m	-
14	은평구 신사1동주민센터(동→남,서→북)	48m	48m	-
15	은평구 신진학원 남측연등(남→서)	24m	24m	-
16	은평구 응암초교 연등(서→북)	24m	24m	-
17	은평구 역촌 E마트(서→북)	33m	33m	-
18	은평구 제각말아파트(북→동,남→서)	48m	66m	증) 18m	현장 여건변화로 물량변동
19	은평구 폭포동입구(북→동,남→서)	48m	48m	-
20	중구 광주회관 (서→북)	24m	24m	-
21	중구 버티고개역 (동→남)	24m	24m	-
22	은평구 북한산로(북한산성~입곡삼거리)	4,286m	11,427m	증) 7,141m	주변 노면 퇴색으로 작업수량 증가
23	마포구 농수산물시장 교차로	14m	30m	증) 16m	현장 여건변화로 물량변동
24	마포구 동교동삼거리 교차로	19m	18m	감) 1m	현장 여건변화로 물량변동

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
25	마포구 가양대교북단 우회전 합류차로	16m	16m	-
26	용산구 한남대교북단~북한산삼거리	23,602m	28,877m	증) 5,275m	주변 노면 퇴색으로 작업수량 증가
27	용산구 독서당로 한남오거리~한남역	6,693m	7,616m	증) 923m	주변 노면 퇴색으로 작업수량 증가
28	은평구 신도치안센터 ~삼천사 입구	11,795m	10,149m	감) 1,646m	현장 여건변화로 물량변동
29	중구 삼일로 명동성당교차로 주변	602m	602m	-
30	중구 태평로1가 코리아나호텔 앞	61m	143m	증) 82m	주변 노면 퇴색으로 작업수량 증가
31	마포구 상암동 월드컵4단지 상가 앞	789m	795m	증) 6m	현장 여건변화로 물량변동
32	은평구 진관2로 은진초교앞 사거리	0m	141m	증) 141m	경찰청 교통규제 긴급작업
33	마포구 DMC입구~ DMC사거리	0m	4,886m	증) 4,886m	직영반 포장구간 긴급작업
합 계		50,140m	67,071m	증)16,931m

○ 변경사유

- 주변 노면퇴색으로 작업물량 증가 : 5개소

- 현장 여건변화로 인한 물량변동   : 7개소

- 경찰청 교통규제 긴급 작업지시   : 1개소

- 직영반 포장구간 긴급 작업지시   : 1개소

□ 향후계획

○ 상기 보고내용과 같이 실제 작업완료분 내에서 기성준공 처리.

붙 임 : 1. 제6차 작업완료 내역서 1부.

2. 제6차 작업완료 사진대지 1부.

3. 제6차 작업완료 도면 1부(별도첨부).  끝.