투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	녹지관리과장
(경유)
제목	변경계약체결통보 - 2015년 광나루한강공원 운동시설 정비공사

1. 녹지관리과-3237(2015.07.21.)호 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

계 약 현 황	공 사 명	2015년 광나루한강공원 운동시설 정비공사
	계약상대자	정로건설 주식회사 (대표 : 이강태)
	변경계약일자	2015.07.21
변 경 내 역	내 용	준공기한 연장, 계약금액 변경 없음
	변경사유	실정검토결과에 의한 설계변경 및 민원사항 반영에 따른 준공기한 연장
기 간 변 경	변경전 착공일자	2015.06.10	변경후 착공일자	2015.06.10
	변경전 준공기한	2015.07.30	변경후 준공기한	2015.08.15
금 액 변 경	변 경 전	247,203,000 원
	변경금액	-
	변 경 후	247,203,000 원

붙     임 : 변경계약체결통보서 1부. 끝.

	총무부장
주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	07/22 이상국
협조자
시행	총무과-12310	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화		/전송		/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개