투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	실정보고에 대한 회신 및 업무요청(한강도심 생태공원확충조성사업-3차)

1 공사감독3처6568(2015.7.15)호와 관련입니다.

2 위호와 관련하여 실정보고된 사항에 대하여 검토하고 아래와 같이 회신  하오니 공사감독업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 아울러 금일부터 중부지방에 많은 비가 내린다는 기상청 예보가 발표됨에 따라 현장관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가.  실정보고 검토 내용

공종	실정보고 내용	승인여부	비고
토공	사석쌓기구간 소단 기존콘크리트 깨기 설계단면과 현황단면 상이로 깨기 및 폐기물처리수량 증가	공단보고대로승인
폐기물처리	서래섬 내부 산책로 설치된 데크 철거시 발생한 폐목재처리 필요	기 실정보고된 마사토포장공종중 발생한 사항으로 공단 보고대로 승인 (적법한 과정으로 처리되었는지 철저한 확인필요)
부대공	호안공사를 위해 설치된 오탁방지막은 공사후 전량 철거하여 폐기물처리토록 설계되었으나 재활용 부서 사용처조회한바 세빛섬에서 일부 필요하다는 의견에 따라 800m 중 500m에 대하여 재활요하고 공사비 절감	공단보고대로 승인

나. 서래섬 진입을 위한 가도설치시 소요된 자재인 사석에 대하여 우리본부 시행예정인 “이촌한강공원 자연성회복사업”에 호안공에 소요될수 있도록 반포현장에 보관하고 향후 해당공사에 소요될수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	김일문		생태공원과장	07/23 최병언
협조자
시행	생태공원과-1823	(		)	접수		(		)
우	133-820	성동구 강변북로 257 (성수동1가642-25)	/
전화	02-3780-0632	/전송	02-3780-0745	/	kim751515@seoul.go.kr	/	대시민공개