함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	정수운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(2015 광암아리수 정수센터 정수지 밸브교체 전기공사)

1. 정수시설과-3091(2015.7.23)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『2015 광암아리수 정수센터 정수지 밸브교체 전기공사』의 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015 광암아리수 정수센터 정수지(1~4지)밸브 교체 전기공사

나. 공사개요 : 정수지(1지~4지) 유출·유입밸브 교체에 따른 전기공사 1식

다. 도급업체 : ㈜ 광명전기 대표 전미경

라. 공사금액 : 금83,816,190원

마. 준공기한 연기

- 당  초 : 2015. 6. 5 ~ 7. 24

- 변  경 : 2015. 6. 5. ~ 2015.10.11.

붙임 : 1. 준공기한연기의뢰서 1부.

2. 보고서 1부. 끝.

	정수시설과장
주무관	박희준		주무관	이정원		정수시설과장	07/23 김창현
협조자
시행	정수시설과-3096	(		)	접수		(		)
우	465-230	경기 하남시 광암동 174 광암아리수 정수센터 보수과	/
전화	02-3146-5372	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개