함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	행정관리과장
(경유)
제 목	설계변경 계약 의뢰(기계설비유지보수연간단가공사)

우리센터에서 시행중인 『2015년 기계설비 유지보수 연간단가 공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 기계설비 유지보수 연간단가 공사

나. 공사개요 : 당초 – 지배수펌프 교체외 21건 정비

변경 – 송수펌프실 송수펌프 냉각수배관 개선외 23건 정비

다. 도 급 자 : 엔제이건설(주) 대표 진현득

라. 계약기간 : 2015.03.23 ~ 2015.12.31.

마. 변경내용 : 신규공정 및 계약물량 변경(계약금액 변경없음)

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증․감
도 급 비	61,491,000	61,491,000	변동없음

바. 설계변경 및 공종별 금액변경 사유

- 신규공종 및 계약물량 증,감 사항 발생

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비. 기타교체비

붙임  1) 설계변경 시행보고서 및 관련서류 1부

2) 설계변경심의결과보고서 및 관련 서류 각 1부.

3) 설계변경 내역서 각 1부.

4) 제경비검증확인서 1부

5) 합의서 1부.   끝.

	정수시설과장
★주무관	정인영		정수시설과장	07/23 윤종민
협조자	주무관	최양교
시행	정수시설과-2639	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5572	/전송		/		/	대시민공개