문서번호	기전과-5059
결재일자	2015.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전과장
차준원	07/23 최주용

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경 승인 요청에 따른 검토 보고(세종대-신호)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07

성동도로사업소

(기 전 과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경승인에 따른 검토 보고

교통안전시설물 원인자 부담공사 변경승인 요청이 있어 관련서류 및 현장 확인후 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

서울지방경찰청 교통관리과-18051호(2015.07.01.)

세종대학교 세종2015-192호(2015.07.17.)

�

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 세종대학교 공공기숙사 및 교육시설 건립공사-신호

공사구간 : 광진구 군자동111번지 일원

공사기간 및 공사참여자

구분	공사참여자			원인자	공사기간
	시공사	감리사	설계사
신호	건웅신호산전(주)	서울시 감리	㈜트래픽스	세종대학교	2014.12.15.~2015.02.12

Ⅲ		변경요청 및 실정보고 검토결과

위치	현황 및 문제점	변경요청의견	검토결과
세종대 기숙사	기존횡단보도 철거후 운전자와 신호등 이격거리 증가로 사고 발생위험	차량지주 2개소에 배면등 설치 (교통관리과-18051)	시경 규제 내용대로 차량지주 2개소에 배면등 설치함이 타당함.

붙    임 : 1. 변경승인 요청 및 규제 1부.

2. 도면 1부. 끝.