문서번호	시설보수과-6473
결재일자	2015.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
이동섭		신동헌	07/23 배광환
협조
	주무관		代김종성

사천교 성능개선 실시설계 시행방안 보고

2015. 7

서부도로사업소

(시설보수과)

사천교 성능개선 실시설계 시행방안 보고

사천교 성능개선(DB18→24) 방안에 따른 실시설계용역 추가과업시행을 위하여 ‘2015년 도로시설물(교량) 일상유지보수공사’의 낙찰차액을 활용하고자 함.

□ 관련근거

◦ 시설보수과-5152(2015.6.12.), ‘사천교 확장 기본계획(안) 검토보고’

◦ 교량안전과-13022(2015.7.16.), ‘사천교 성능개선 방안 통보’

□ 추진경위

◦ ‘15. 1월 : 사천교 확장 기본 및 실시설계용역 착수

◦ ‘15. 4월, 6월 : 사천교 확장 기본계획(안) 관련부서 합동검토(2회)

◦ ‘15. 5월 : 기존 교량 정밀안전진단 실시

◦ ‘15. 6월 : 도시안전기획관 검토보고

- 사천교 기존교량 성능개선 별도 계획에 의거 추진

◦ ‘15. 7월 : 사천교 성능개선 방안 수립(교량안전과)

□ 성능개선 필요성 검토결과(교량안전과)

◦ 사천교 기존 교량 정밀안전진단 결과 구교(1962년 준공)의 상판슬래브 내하력이 DB-24를 만족하지 못하는 것으로 평가됨에 따라,

◦ 교량의 장기적인 안전성 확보 및 도로교 설계기준에 근거하여 성능개선 시행 필요

‣ 2016년 예산 확보하여 성능개선 시행

□ 실시설계 용역 시행

◦ 추진방안 : 현재 진행중인 ‘사천교 확장 기본 및 실시설계용역’에 포함하여 추가 과업으로 시행

◦ 예산확보 : ‘15년 도로시설물(교량) 일상유지보수’ 낙찰차액 사용

- 소요예산 : 74,965천원

- 예산과목 : 교량안전과, 일반교량관리, 도로시설물(교량) 일상유지보수, 시설비및부대비, 시설비

※ 도로시설물(교량) 일상유지 예산현황

(단위:백만원)

구 분	예산액	공사발주액	도급액	낙찰차액	비고
금 액	1,432	1,303	1,129	174	관급비 84 이설비 20

□ 향후계획

◦ ‘15. 7월 : 사천교 성능개선 추가 과업 지시

◦ ‘15. 8월 : 기본설계 완료(성능개선 포함)

◦ ‘15. 9~10월 : 설계자문 및 실시설계

◦ ‘15. 11월 : 용역준공

붙임 : 1. 사천교 성능개선 방안 1부.

2. 실시설계 용역비 산출내역 1부.  끝.