투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	운영1과장
(경유)
제 목	『목동야구장 펜스 보호패드 구매설치』건 납품기한 연기요청

1. 우리사업소에서 시행중인 『목동야구장 펜스 보호패드 구매설치』건에 대해 다음과 같이 납품기한을 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사 개요

• 공 사 명 : 목동야구장 펜스 보호패드 구매설치(공정율 55.5%)

• 계 약 자 : ㈜필드테크 대표자 엄미화

• 계약금액 : 금237,300,000원(금이억삼천칠백삼십만원)

• 공사내용 : 야구장 내외야 펜스 보호패드 661㎡ 설치 등

나. 납품기한 연기사유

• 본 건 대상 구매물품이 미국에서 제작되어 국내로 이동 운반되는 바 절대기간이 소요되며 당초 03.10일까지 납품기한이나 프로야구 시범경기 1~2일차 경기가 중첩되어 납기내 현장설치 불가능하므로 6일차 시범경기가 종료된 이후이 03.15~03.19 기간에 현장설치함이 타당하므로 납품기한을 연장하고자 함

다. 납품기한 연기

• 당초 : 2014. 02. 11 ~ 2014. 03. 10

• 변경 : 2014. 02. 11 ~ 2014. 03. 23 (※총 13일 연기)

라. 연기사유 귀책소재 : 서울시 체육시설관리사업소

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

덧붙임 : 납품기한 연기보고서 1부 및 합의서(별도송부) 1부.  끝.

	운영2과장
★주무관	이경재		운영2과장	전결 03/10 代정남영
협조자
시행	운영2과-2750	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울 양천구 안양천로 939(목1동 914)	/	http://stadium.seoul.go.kr
전화		/전송	02)2649-7145	/		/	대시민공개