투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	2014년 뚝섬전망문화콤플렉스 시설물 관리용역 변경계약 의뢰(수정)

1. 운영총괄과-314(2015.7.10.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행하고 있는『2014년 뚝섬전망문화콤플렉스 시설물 관리 용역』과 관련, 계약변경(기간연장) 관련 계약기간 수정사항이 있어 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

가. 용역 개요

가. 계약건명 : 2014년 뚝섬전망문화콤플렉스 시설물 관리 용역

나. 계약기간 : 2014. 7. 15 ~ 2015. 7. 14

다. 계 약 자 : 엠에이치환경(주)(대표 김미화)

라. 계약금액 : 금199,349,500원

나. 변경계약 의뢰

가. 계약변경 내역

구분	변경전	변경후	비고
계약기간	2014.7.15~2015.7.14	2014.7.15~2015.7.31	17일 기간 연장
계약금액	199,349,500원	208,459,550원	증)9,110,050원

- 계약금액 산출내역 : 2014년 계약금액(199,349,500원) + 〔월산출금액                        (16,612,455원) ×17일/31일〕

나. 계약변경 사유 : 입찰공고기간,대상자 선정 및 인수인계 기간 고려

다. 예산과목 : 한강공원 운영 및 관리/ 한강공원시설 개선 및 관리

뚝섬전망문화복합시설 운영 및 관리/ 공공운영비

붙임  1. 방침서 1부.

2. 2014년 계약내역서(변경) 1부.  끝.

	운영총괄과장
주무관	김용광		운영총괄과장	07/23 代김기운
협조자
시행	운영총괄과-660	(		)	접수		(		)
우	133-820	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02)3780-0812	/전송	02)3780-0803	/	dragonk12@seoul.go.kr	/	대시민공개