투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	재사용플라자 건립공사 건설사업관리용역 변경계약 의뢰

1. 우리 본부에서 시행중인「재사용플라자 건립공사 건설사업관리용역(감독권한대행)」에 대하여 아래와 같이 변경계약(총차 및 1차)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 재사용플라자 건립공사 건설사업관리용역(감독권한대행)

나. 용역기간 :′15.01.22~′17.03.21 (1차 :′15.1.22~′15.10.17)

다. 계약금액 : 2,124,500천원(1차:600,000천원)

라. 계 약 자 : ㈜펨코엔지니어링 건축사사무소외 1개사

마. 계약변경 내용

구분		변경 전	변경 후	비 고
용역기간	총차	2015.01.22~2017.03.21	변경없음
	1차	2015.01.22~2015.10.17	변경없음
계약금액	총차	2,124,500,000원	변경없음
	1차	600,000,000원	571,160,000원	감 28,840,000원

바. 예산과목 :  효율적인 폐기물처리/ 생활폐기물 재활용 극대화/ 서울 재사용 플라자 조성/ 감리비(401-02)

붙임  1. 보고서 사본 1부.

2. 책임감리용역 배치계획 조정 승인 요청서 1부.

3. 변경 계약 총차·1차 배치표 및 산출내역서 사본 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김찬유		환경시설과장	신명승		건축부장	07/23 안재혁
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	건축부-8394	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개