함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	현장실정보고 검토결과 통보

1. 공사감독2처-10835(2015.07.22)호와 관련입니다

2. 위호와 관련 귀 공단에서 위탁감독중인 “신당동 368번지 외 5개소 배급수관 정비공사”에 대한 공사실정 보고서를 검토하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 공사준공에 차질이 없도록 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 검토의견

구 간	시설관리공단 실정 보고	사업소 검토의견
3구간	1) 3구간 터파기 공종 기계터파기로 변경 - 볼라드 제거시 소규모 장비 진입가능 - 예산 절감 및 시민불편 최소화를 위하여 기계터파기로 변경 - 백호(0.18)터파기 90% + 인력터파기 10% 2) 3구간 기존관 폐쇄 - 장충파출소 앞(10m), 종점부(15m) 및 동국대 분기관(2개소, 10m)은 기존관 철거하고 잔여구간은 기존관 폐쇄가 불가피함	1) 기계터파기 가능한 부분에 한하여 변경 - 당초 설계시 보도에 지장물이 많고 종점부의 보도폭이 좁아 장비진입이 어려워 인력 터파기로 설계함 - 장비 진입이 가능한 부분에 한에서 기계 터파기로 변경하고 지장물이 많고 진입이 어려운 부분은 기 설계된 인력터파기로 시행 2) 3구간 기존관 폐쇄 - 기존관 철거가 가능한 구간은 철거하고 나머지 구간은 기존관 폐쇄

끝.

	중부수도사업소장
★주무관	이상현		주무관	박혁순		급수운영과장	전결 07/24 이승철
협조자
시행	급수운영과-16069	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과	/
전화	3146-2155	/전송	3146-2289	/	sanghyeon@seoul.go.kr	/	대시민공개