문서번호	급수운영과-5120
결재일자	2014.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
유명수		이경로	03/11 김광식
협 조
	시설관리과장			代홍갑표
	주무관			공문수

2014년 장기계속 단가계약 발주계획

2014. 3

강남수도사업소

(급수운영과)

2014년 장기계속 단가계약 발주계획

우리사업소에서 시행예정인 2014년 급수공사, 누수복구공사, 시설물정비공사, 포장복구공사 등은 계속 반복적으로 시행되는 단가계약대상사업으로 전년도 발주공사 종료후 작업의 중지를 예방하기 위하여 장기계속 공사로 발주코자 함.

Ⅰ		‘14년 발주대상

구분	계	급수공사	누수복구	시설물정비	포장복구	폐기물처리	비고
건수	12	4	1	2	1	4

Ⅱ		계약방법

※ 관련근거 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제21조(장기계속계약)

ㅇ 단가계약의 장기계속계약시행 방법

- 총 예정물량은 장기계속계약 절차에 따라 2015년 준공시까지의 전체물량으로           하되 2014년도 12월31일까지의 예정물량과 2015년도 준공시까지의 예정물량을          합산 산출하고 각 연도별 총 소요예산을 명확히 구분하여 발주

ㅇ 2015년도 1월부터 준공시까지 집행할 2차년도 예정량에 대하여는 익년도 예산을         확보한 후 2015년 1월중에 국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제 67조         (회개년도 개시전의 계약)에 의거 계약요구

Ⅲ		계약기간

○ 2014년도 계약기간(1차수) : 계약일로부터 2014.12.31일까지

○ 2015년도 계약기간(2차수) : 2015.1.1. ~ 준공일까지

Ⅳ		장기계속단가계약 발주예정 내역

구분	공사명	공사기간	공사개요	총공사비 (백만원)	발주예정 (월)	비고
급수공사	역삼1동외 14개동 상수도공사	2014.7.1. ~2015.6.30	D=13~300mm, L=2,550m	1,200	2014.5
	논현1동외 6개동 상수도공사	2014.7.1. ~2015.6.30	D=13~300mm, L=2,340m	1,100	2014.5
	반포1동외 10개동 상수도공사	2014.7.1. ~2015.6.30	D=13~300mm, L=1,900m	950	2014.5
	서초1동외 10개동 상수도공사	2014.7.1. ~2015.6.30	D=13~300mm, L=1,800m	900	2014.5
누수복구	서초,강남구관내 상수도 긴급누수복구공사	2014.7.1. ~2015.6.30	누수복구:1200개소 불용관정비:400개소	1,800	2014.5
시 설 물 정 비	강남구관내 상수도시설물 및 소화전보수공사	2014.5.1. ~2015.4.30	밸브 및 소화전 정비 : 158개소	1,500	2014.3
	서초구관내 상수도시설물 및 소화전보수공사	2014.5.1. ~2015.4.30	밸브 및 소화전 정비 : 258개소	1,300	2014.3
포장복구	강남,서초구관내 포장도로 굴착복구공사	2014.5.1. ~2015.4.30	도로복구:130a	1,200	2014.3
폐 기 물 처 리	강남구관내 송배수관정비 등 건설폐기물처리용역	2014.5.1. ~2015.4.30	운반 : 1200㎥ 처리 : 2800톤	85	2014.3
	강남구관내 급수공사 건설폐기물처리용역	2014.7.1. ~2015.6.30	운반 : 1000㎥ 처리 : 2500톤	70	2014.5
	서초구관내 급수공사 및 누수 복구공사 건설폐기물처리용역	2014.7.1. ~2015.6.30	운반 : 1824㎥ 처리 : 4056톤	100	2014.5
	서초구관내 건설폐기물처리용역	2014.5.1. ~2015.4.30	운반 : 1220㎥ 처리 : 2850톤	85	2014.3

끝.