문서번호	시설보수과-5704
결재일자	2015.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김승진		07/24 박병연
협 조
	주무관			유태용
	주무관			윤동원

'15년 도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고(3차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시설보수과

‘15년 도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고(3차)

관내 도로시설물 손상에 대하여 작업지시한 내역에 대한 작업완료 결과를 보고 드림

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2015년 도로시설물 일상유지보수공사(강서)

나. 공사기간 : 2015. 4. 1 ~ 12. 31

다. 도 급 비 : 1,635백만원

라. 공사개요 : 포장보수 A=240a, 신축이음보수 L=225m 등

마. 도 급 자 : ㈜메트로종합건설 외1 대표 박소희

2. 보고내용

가. 작업지시 및 완료

- 3차 작업지시『근거:시설보수과-4338(2015.6.8)』

․ 작업기간 : 2015.  6.  8 ~  7. 31

․ 작업완료 : 2015.  7. 22

나. 작업지시 및 완료내용

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
3차	1	신월IC	교면포장(김포방향)	절삭및덧쒸우기,방수	999,0㎡	절삭및덧쒸우기,방수	999,0㎡
	2		P1,P2교각기둥(벽체)	콘크리트 표면보수	288,72㎡	콘크리트 표면부수	288,72㎡
	3	화곡고가차도	보도연석 및 중앙연석부	콘크리트 표면보수	160.48㎡	콘크리트 표면보수	160.48㎡
			이음부(상,하행)	차수조인트 설치	80.0m	차수조인트 설치	80.0m
	4	구로1교, 행주1교	구로1교(A1,A2) 행주1교(A1~A2)	점검통로 및 점검사다리 설치	158.0m	점검통로 및 점검사다리 설치	158.0m

다. 개략공사비 : 356,290천원(세부내역 별첨)

3. 검토의견

- 작업지시내용과 같이 이상없음 작업완료하여 추후 설계변경시 반영

하고자 함

별첨 : 1) 시공사 작업완료보고서 1부(종이문서)

2) 작업완료 보수사진 1부(종이문서). 끝.