보고서

(상수도시설물공사 준공연기)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
조규환	김태형	07/24 代김태형
협 조

문서번호 :	급수운영과-19151

「성동,광진구관내 상수도 시설물공사」감독업무 수행 중 아래와 같은 상황이 발생하여 보고합니다.

2015. 7. 24.

************************조 규 환

제목 : 상수도 시설물공사 준공 연기

□ 현   황

○ 공사명 : ************************************

******************************

**************************

*********************

○ 공사기간 : 2015.06.29.~2015.07.24.

□ 보고내용 및 조치의견

○ 본 공사의 준공기한은 2015.07.24.이나 공사 위치가 간선도로상으로 관할 경찰서와 교통 협의한바, 우기철 이후로 승인되어 아래와 같이 준공기간을 연기코자 합니다.

- 당초 공사기간 : 2015.06.29.~2015.07.24.

- 변경 공사기간 : 2015.06.29.~2015.08.12.

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과

따로붙임 : 상수도시설물 보수공사 작업기한 연기요청서 1부(별첨).  끝.