문서번호	시설관리과-19934
결재일자	2015.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
김재영		07/24 오기석
협조

급수공사 연기보고서

[***********(개량-2)]

2015. 7

명에 의거 동대문구 지역담당 업무 수행 중 공사기간 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 현 황

가. 공 사 명 : 2015년 제기동 외 6개동 상수도공사(연간단가계약)

나. 도 급 자 : 수호건설 대표 문병순

□  보고내용

○ 급수공사 작업지시 사항 중 아래와 같은 내용으로 부득이 공사기한 재연기가 필요한 실정입니다.

공 사 종 류	공사 위치	공 사 개 요	연 기 사 유	공 사 일 자
				당 초	변 경
개량-2	*********	개 량 (직결급수 및 물탱크 철거)	수요가 내부공사 지연으로 작업일정 협의 중	2015.07.01 ~2015.07.24	2015.07.01 ~2015.08.04

□  처리의견

○ 원활한 공사시행을 위해 공사기한을 재연기하여 공사현장 안전관리 및 민원처리에 만전을 기하고자 합니다.

끝.