투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약의뢰(지하철919공구 전면책임감리용역, 총괄6회 및 6차1회)

1. 도시철도토목부-9271(2015.7.23)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 『서울지하철9호선3단계 919공구 건설공사 전면책임감리용역』에 대한 설계변경 계약을 아래와 같이 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 서울지하철9호선3단계 919공구 건설공사 전면책임감리용역

나. 계 약 자 : ㈜수성 대표이사 박미례 외 4개사

다. 계약금액 : 총괄)6,172,205,000원, 6차)927,000,000원

라. 용역기간 : 총괄) 2009.11.18. ~ 2016.02.28.

6차) 2015.02.01. ~ 2015.12.31.

마. 계약금액 조정 현황                               (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
용역비	총괄6회	6,172,205,000	6,467,506,000	증)295,301,000
	6차1회	927,000,000	1,222,923,000	증)295,923,000

※ 용역기간 변경없음

바. 변경사유 : 물가변동으로 인한 계약금액 조정, 안전․지중전담감리원 투입비 반영, 석촌지하차도 도로함몰 분석자문 용역비 반영

사. 예산과목

특별회계) 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선2단계건설, 시설비및부대비, 감리비

일반회계) 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 공사장안전관리대책추진, 감리비

일반회계) 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 공사장안전관리대책추진, 사무관리비

첨부 : 1. 919공구 전면책임감리용역 계약금액조정 검토보고 1부.

2. 설계변경내역서(총괄6회) 1부.

3. 설계변경내역서(6차1회) 1부.

4. 합의각서(총괄6회 및 6차1회) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정중규		궤도과장	홍숭희		도시철도토목부장	07/24 김진팔
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	도시철도토목부-9430	(		)	접수		(		)
우	100-170	서울 중구 무교동 96번지 프리미어 플레이스 9층	/
전화	772-7242	/전송	772-7306	/		/	대시민공개