투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	(주)신명건술기술공사 대표이사 김장흥
(경유)
제 목	설계변경(1차1회)시행 및 준공기한 연기 알림

1. 우리시와 귀사간 계약 체결하여 시행중인 『잠원2빗물펌프장신설공사 외 1개소 전면 책임감리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차1회) 및 준공기한 연기 사항을 알려드리오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 잠원2빗물펌프장신설공사 외 1개소 전면책임감리용역(1차분)』

나. 도 급 비 : 전체1,108백만원(1차분 : 628백만원)

다. 도 급 자 : 신명건설기술공사 외 2개사

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
전체분	1,108,750,000	1,108,750,000	변동없음
1차분	628,000,000	628,000,000	변동없음	내역변경

마. 준공기한 연기[1차분]

구 분	당 초	변 경	비 고
1차분	2013.04.1 ~ 2014.03.11	2013.04.01 ~ 2014.06.10

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이병환		치수시설과장	03/11 서관석
협조자
시행	방재안전시설부-3704	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개