문서번호	서울특별시차량정비센터-11033
결재일자	2015.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	차량정비센터소장
김응균		이광천	07/27 문호준
협조
	서무팀장		유진국

준공기한 연기 보고

공사명 : 조립식 정비동(4개동) 전력간선 케이블 증설공사

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07.

차량정비센터

준공기한 연기 보고

공사명 : 조립식 정비동(4개동) 전력간선 케이블 증설공사

우리센터에서 시행하고 있는 『조립식 정비동(4개동) 전력간선 케이블 증설공사』에 대하여 아래와 같은 사유로 인하여 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

공사현황

❍ 공 사 명 : 『조립식 정비동(4개동) 전력간선 케이블 증설공사』

❍ 공사개요

- 전선관 및 케이블 설치 : F-CV 120㎟외 5종 L=471m

- 차단기 함 설치 : 2개소

- 기존 전선관 및 케이블 철거 : 1식

❍ 계 약 자 : (주)서광전기  대표 안창주

❍ 도 급 액 : 금57,183,960원(금오천칠백일십팔만삼천구백육십원)

❍ 공사기간 : 2015년 7월 09일 ~ 2015년 08월 02일

❍ 추진공정 : 전선관(매립배관 및 복개층 노출 배관) 설치공사 (진행률 65%)

보고내용(연기사유)

❍ 본 공사의 공사기간중에 소나기성 강우가 빈번히 발생하여 지하 복개 바닥수위가 높아, 현재 계획공정대로 진행되지 못하며 기한내 준공이 어려워 준공기한 연기가 불가피한 실정이며(강우 발생일 -- 8일),

❍ 기관반(측면건물) 공사의 경우 현 분점함 위치 하부에 횡주보 및 기둥이 있어 천공작업이 불가하며, 불가피 분전함 측면을 천공함으로서 상부 노출로 금속전선관 추가설치 하게되어, 추가공정 발생으로 공사기간 연기필요(추가 소요일 -- 2일)

보고자 의견

❍ 본 공사는 변전실에서 지하 복개 구조물 천장을 통해 노출배관으로 전력간선 케이블을 증설하는 공사로서 주된 공정(작업)이 지하 복개 구조물 안에서 진행되나, 빈번한 강우발생으로 작업을 할수 없어 절대공기가 부족한 사항으로 2015년 08월 12일까지 공사기간을 연기하여 공사품질관리에 만전을 기하고자 하며, 이 내용을 시공사인 (주)서광전기 안창주에게 통보후 재 계약 하고자 합니다.

▶ 준공기한  당초 2015년 08월 02일 → 변경 2015년 08월 12일

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 공사기간중 강우발생 현황 1부. 끝.