투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(하천관리과장)
(경유)
제 목	예산 재배정 요청(도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 건설사업관리용역)

1. 하천관리과-8448호(2015. 5.27)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 「도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 건설사업관리용역」  의 ‘15년도 예산 작업시 당초 준공기한(’15. 5.30)을 고려하여 감리비를 책정하였으나 사업계획이 변경됨에 따라 금년도 감리비가 부족한 실정이므로 당해 사업 시설비를 감리비로 변경 재배정 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 예산 배정 현황                                              (단위 : 원)

구분	당초	변경	증.감(△)
계	11,686,000,000	11,686,000,000	-
시설비	11,357,000,000	11,057,000,000	△300,000,000
감리비	329,000,000	629,000,000	300,000,000

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	조동협		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	07/27 임춘근
협조자
시행	방재시설부-10028	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02-3708-8774	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개