문서번호	시설과-5322
결재일자	2015.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
송창선		김한준	전결 07/27 이용태
협조
	조경팀장		남상국

중랑캠핑숲 내

청소년 체험의숲 조성공사 검토보고

2015. 7

중부공원녹지사업소

(시설과)

중랑캠핑숲 내

청소년 체험의숲 조성공사 현안사항 검토보고

중랑캠핑숲 내 청소년 체험의숲 조성공사와 관련, 체험의숲 인지성 강화와 유지관리상 필요성이 제기된 시설에 대해 검토보고 합니다.

공사개요

❍ 위    치 : 중랑구 망우동 산33 중랑캠핑숲 일대

❍ 공사기간 : ‘15.4.20 ~ 8.17

❍ 사업내용 : 모험시설(3개코스 31게임, 연습 2게임)

❍ 도 급 비 : 749백만원(관급 71, 이전비 15)

❍ 도 급 자 : 아이서비스(주)

❍ 공 정 률 : 30%

- 잡목제거 및 지장물 이설 완료

- 원주목기둥 프로파일 기초설치 완료, 원지목 지선설치작업 진행중

검토사항

❍ “청소년 체험의숲”을 상징하는 게이트

- 청소년 체험의숲을 나타낼 수 있는 독특한 상징관문 필요

❍ 체험의숲 내 장비보관 및 운영자 대기실

- 운영자센터(매표소)에서 체험의숲까지 약 120m로 장비착용후 이동곤란

❍ 체험시설과 기존 공원을 분리할 수 있는 안전시설

- 체험의숲 운영시간외 공원이용자들의 안전사고 방지를 위한 접근차단 필요

보고자 의견

❍ 상기 사항에 대해 공사감독을 맡고 있는 서울시시설관리공단으로 통보하여 검토․회신토록 하겠음.  끝.