투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(북서울꿈의숲 족구장 조명시설 설치공사)

1. 북서울꿈의숲관리사무소- 4476(2015.6.18.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『북서울꿈의숲 족구장 조명시설 설치공사』의 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 북서울꿈의숲 족구장 조명시설 설치공사

나. 공사개요 : 족구장 내 조명시설(조명탑 2곳, 분전반1개)설치

다. 도급업체 : ㈜새론씨앤이 (대표 이천재)

라. 공사금액 : 금10,167,260원

마. 준공기한 연기

- 당  초 : 2015.6.15. ~ 2015.7.30.

- 변  경 : 2015.6.15. ~ 2015.8.21.

붙임 : 준공기한연기의뢰서 1부. 끝.

	북서울꿈의숲관리사무소장
주무관	박도복		관리팀장	김환형		북서울꿈의숲관리사무소장	07/27 김상근
협조자
시행	북서울꿈의숲관리사무소-5447	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 강북구 월계로 173 (번동 산 28-6)	/
전화	02-2289-4016	/전송	02-2289-4040	/		/	대시민공개