문서번호	조경지원과-4680
결재일자	2015.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		조경지원과장
임은희		07/28 김제중
협조	주무관		이전호
	주무관		박종천

『2015 양묘장 기반시설 정비공사』 등 3개 공사

준공기한 연기 검토 보고

2015. 7.

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

『2015 양묘장 기반시설 정비공사』 등 3개 공사

준공기한 연기 검토 보고

2015 양묘장 기반시설 정비사업 추진과 관련하여 연이은 장마로 인해 준공기한 연장 사유가 발생하여 다음과 같이 보고 드림.

1		공사(용역) 개요

○ 위    치 : 갈매, 송릉 양묘장

공사(용역)명	기 간	도급금액(원)	도급업체
계		74,306,780
2015 양묘장 석면철거 및 폐기물처리용역	‘15.07.08 ~ 08.01	14,819,380	㈜원탑산업개발 대표 김광부
2015 양묘장 기반시설 정비공사	‘15.07.10 ~ 08.07	45,763,000	㈜유한화건 대표 김회인
2015 양묘장 기반시설 정비 전기공사	‘15.07.14 ~ 08.12	13,724,400	광원전설(주) 대표 김영선

2		준공기한 연기

○ 연기사유

- 공사 특성상 석면 철거 후 곧바로 지붕설치가 이루어져야하는데 착공 이후 장마가 계속되어 절대공기가 부족하여 준공기한 연기 (석면착공 7.8일 이후 약 13일간 비 또는 예상)

○ 준공기한 변경

공사(용역)명	당초기간	변경기간	비고
2015 양묘장 석면철거 및 폐기물처리용역	‘15.07.08 ~ 08.01	‘15.07.08 ~ 08.17	15일 연장
2015 양묘장 기반시설 정비공사	‘15.07.10 ~ 08.07	‘15.07.10 ~ 08.21	〃
2015 양묘장 기반시설 정비 전기공사	‘15.07.14 ~ 08.12	‘15.07.14 ~ 08.26	〃

○ 지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

3		행정 사항

○ 준공기한 연기시행 및 의뢰(공원운영과).

붙 임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.