문서번호	설비부-2667
결재일자	2014.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
정광식	代정광식	03/11 박기형

『서남권 야구장 건립공사(기계분야 11개 공종)』 하도급 계약변경 검토 보고

2014. 3.

도시기반시설본부

(설 비 부)

하도급 계약변경 검토 보고

서남권야구장 건립공사 수익시설 설계변경에 따른 하도급 변경 계약이 체결되어 이에 대한 감리단 실정보고 내용 검토 및 조치의견 보고임.

관련 공문

□ 감리단 실정보고

- 서야책감 2014-63호(2014.03.07.) 하도급 변경계약 통보설류 검토보고

(기계설비 11개 공종)

- 해당 공종 : 지열냉난방, 수영장설비, T.A.B, 기계설비, 가스배관, 정화조,

동파방지열선, 자동제어, 연도, 방진설치, 소방설비(기계)

□ 변경사유 : 수익시설 설계변경에 따른 하도급 변경 계약

감리 실정보고 내용

□ 하도급 물가변동에 따른 계약금액 변경

업 체	구 분	하도급할 금 액	하도급금액	증감금액	하도급 비율	비 고
㈜건형설비 -지열냉난방 -	당 초	100,717,482원	116,599,921원		115.77%	ESC
	변 경	106,424,142원	123,206,521원	6,606,600원	115.77%	ESC
한화레져(주) -수영장설비-	당 초	117,224,546원	211,620,200원		180.53%
	변 경	124,656,386원	225,036,900원	13,416,700원	180.53%
㈜신한기연 -T.A.B-	당 초	299,179,631원	319,000,000원		106.62%
	변 경	438,183,323원	460,655,125원	141,655,125원	105.13%
㈜구보공영 -기계설비-	당 초	11,058,055,580원	9,572,000,000원		86.56%
	변 경	14,236,264,718원	12,673,873,782원	3,101,873,780원	89.03%
㈜삼천리이엔지 -가스배관-	당 초	117,095,119원	124,710,300원		106.50%
	변 경	144,393,227원	134,431,064원	9,720,764원	93.10%
남일환경건설㈜ -정화조 -	당 초	86,350,033원	122,431,100원		141.78%
	변 경	151,855,878원	180,831,653원	58,400,553원	119.08%
㈜성창기전 -동파방지열선-	당 초	79,879,995원	89,186,900원		111.65%
	변 경	248,621,272원	232,371,718원	143,184,818원	93.46%

업 체	구 분	하도급할 금 액	하도급금액	증감금액	하도급 비율	비 고
㈜아이콘트롤스 -자동제어 -	당 초	826,170,138원	750,065,800원		90.79%
	변 경	2,447,873,452원	2,193,841,640원	1,443,775,840원	89.62%
대성테크(주) -연도-	당 초	439,592,026원	439,033,100원		99.87%
	변 경	810,833,452원	793,025,739원	353,992,639원	97.80%
㈜엔에스브이 -방진설치-	당 초	400,831,126원	357,348,200원		89.15%
	변 경	465,378,200원	420,630,816원	63,282,616원	90.38%
인하공영㈜ -소방(기계)-	당 초	1,568,920,863원	1,455,455,000원		92.77%
	변 경	2,443,003,461원	2,167,048,555원	711,593,555원	88.70%

□ 공사기간 변경 : 없음

□ 하도급 계약변경 통지

변경 계약일	통지일(시공사→감리단)	보고일(감리단→발주청)
2014. 01. 29.	2014. 02. 28.	2014. 03. 07

검토 및 조치의견

□ 검토의견

- 원도급자인 현대산업개발(주)의 수익시설 등 설계변경에 따른 하도급 업체와의 계약

변경사항으로 하도급자 시공능력, 변경계약 관련 제반서류 검토 결과 적정 함.

□ 조치사항

- 하도급 계약 변경 건에 대해 건설총괄부(건축부 참조)에 통보 조치

따로붙임   하도급 변경계약 기술검토서(별도 첨부) 각 1부.   끝.