함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	기성금 지급에 따른 선금 및 노무비 정산

우리 정수센터에서 발주한 아래 공사의 기성검사로, 행정자치부예규 제23호(2015.06.23) “지방자치단체입찰 및 계약집행기준의 제6장 선금 ․ 대가 지급요령”에 의거 아래와 같이 선금 및 노무비 정산 후 기성금을 지급하고자 합니다.

가. 공사내역

1) 공사명 : 암사아리수정수센터 시설물 유지 보수공사

2) 계약상대자 : ㈜무한건설산업 김연화

3) 계약금액 : 금201,316,000원

4) 계약일 : 2015.05.12

5) 계약기간 : 2015.05.12 ~ 2015.11.08

나. 선금 및 노무비 정산 후 기성금 지급액

1) 선금 지급액 : 금84,370,000원

2) 노무비 지급액 : 금18,810,000원(6월)

3) 금회 기성금 신청액 : 금144,650,000원

4) 현재공정 : 2015.07.10 기준 누계 72%

5) 선금 정산액 :  선금액 × 기성부분의 대가 상당액

계약금액

84,370,000 × 144,650,000

201,316,000        = 60,621,710원

6) 노무비 정산액 :  57,750,000원

7) 기성금 지급액 : 기성금 신청액 - 선금 정산액 – 노무비 정산액

144,650,000 – 60,621,710 – 18,810,000 = 65,218,290원

8) 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선교체비,기타교체비      끝.

주무관	변민용		행정관리과장	손수곤		소장	07/28 유성종
협조자
시행	행정관리과-7122	(		)	접수		(		)
우	134-852	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02)3146-5712	/전송	02)3146-5707	/	byunmy@seoul.go.kr	/	부분공개(7)