문서번호	토목부-15628
결재일자	2015.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
정문수	이승우	노우성		전결 07/28 형태경
협 조
	주무관		신복민

설계용역 준공기한 연기 보고

(대청지하차도 설치공사 실시설계)

2015. 7.

서울특별시도시기반시설본부

( 토  목  부 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

설계용역 준공기한 연기 보고

( 대청지하차도 설치공사 실시설계 )

시행 중인 『대청지하차도 설치공사 실시설계 용역』에 대한 준공기한 연기 보고임.

※ 준공기한 : 당초)2015. 8. 1. → 변경)2015.12.31. (증5개월)

▢ 근    거 : 경동 제2015-850호(2015. 7.14.)로 과업기간 연장 요청

▢ 용역 개요

◦ 용 역 명 : 대청지하차도 설치공사 실시설계용역

◦ 위    치 : 강남구 삼성병원앞 사거리 교차로 주변

◦ 용역내용

- 대청지하차도 신설   : 폭4차로, 연장440m (Box180m, U-Type260m)

- 일원보도육교 재설치 : 폭3.0m, 연장44.8m

◦ 용역기간 : 2014.10. 6. ~ 2015. 8. 1.

◦ 용 역 비 : 857,379,000원

◦ 용 역 사 : ㈜경동엔지니어링, ㈜동해종합기술공사, ㈜삼안

▢ 추진현황 (공정률 : 40.95%)

◦ '04. 8. ~ '06. 2.  : 기본 및 실시설계용역 시행

◦ '09. 7.30. : 강남순환도시고속도로(8공구) 주민설명회(공사 사전설명)

◦ '09. 9.21. : 청원서 접수(김재희 외 5,522명, 소개 김현기 시의원)

- 도로, 소음 등 환경피해 및 방음둑 훼손에 대한 대안으로 양재대로 지하화 요구

◦ '10. 3. ∼ '12. 2. : 양재대로 지하화 타당성조사 및 기본계획 용역시행

◦ '12.10.30. : 투자심사 심의 (적정 : 양재대로 연속화구간 4차로 계획)

◦ '14. 7. 7. : 대청지하차도 실시설계 요청(도로계획과→토목부)

◦ '14.10. 6. : 계약 및 착수

◦ '15. 3. ~ 7. : 양재대로 선형 변경을 위한 협의(삼성의료원, 5회)

◦ '15. 7. 현재 : 설계자문회의(1차) 준비 중

▢ 보고내용

가. 용역비 및 용역기간 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비 고
용 역 비	857,379,000	857,379,000	-	변경없음
용역기간	′14.10. 6.~′15. 8. 1.	′14.10. 6.~′15.12.31.	증)5개월

나. 준공기한 연기 사유

◦ 양재대로에 설치되는 지하차도가 지하철 3호선 상부 통과로 양재대로 접속도로(일원동길) 종단 상향으로 발생하는 일원동길 기존 도로와의 단차해소를 위하여 양재대로 평면선형을 삼성의료원 신축부지 측으로 이격(8m)을 위한 협의 지연

- 삼성의료원 신축부지의 건폐율 감소로 협의 지연 (′15. 3. ~ ′15. 7.)

- 일원동길 교차내 종단구배(7.84% / 6.0%) 기준 위배

◦ 본 용역구간과 연결되는 일원지하차도 기하구조 불량구간 개선 및 차로수 변경(6차로 → 4차로)을 위한 설계 주체 확정을 위한 협의 (도로계획과)

〈 일원지하차도 기하구조 현황〉

(단위 : m/%)

구 분	기 준(K값)	현 황(K값)	비 고
볼록곡선	30 이상	시점부 28.97 종점부 9.65	기준 미달
오목곡선	25 이상	중앙부 9.21

◦ 설계자문회의 및 공사 중 교통소통대책 자문회의 등 행정절차 이행

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치의견

◦ 상기와 같이 양재대로 선형 변경 및 일원지하차도 기하구조 개선을 위한 협의 기간 소요로 실시설계 절대공기가 부족하여 설계용역 준공기한을 연기하여 용역 수행에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 용역사 공문 1부.

2. 예정공정표(변경) 1부.  끝.