함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰(관악,금천구 관내 상수도(송배수관정비,시설물,포장복구등)공사 건설폐기물처리용역)

1. 우리사업소에서 시행중인 「2014년 관악, 금천구 관내 상수도(송배수관정비, 시설물, 포장복구 등)공사 건설폐기물 처리 용역」 에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종) 시행하고 계약 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 관악, 금천구 관내 상수도(송배수관정비, 시설물, 포장복구 등)공사 건설폐기물 처리 용역(단가계약)

나. 용역개요

- 당초 : 폐기물운반 1,990㎡, 폐기물처리 3,341톤

- 변경 : 폐기물운반 1,667㎡, 폐기물처리 3,538톤

다. 용역기간 : 2014.07.24.~ 2015. 07. 30.

라. 계 약 자 : 우광개발㈜  대표 임태권

마. 설계변경  금액내용                                  (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증.감	비 고
총부기금액	85,693,000원	83,030,000원	감2,663,000원
1차수 금액	28,888,000원	28,888,000원	-	2014년 계약분
2차수 금액	56,805,000원	54,142,000원	감2,663,000원

바. 설계변경 사유 : 성상별 물량 증,감

사. 예산과목 : 자본적자출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(무라이닝관정비)

자본적자출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(간선배관공사)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(밸브류유지관리)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(송배수관정비)

따로붙임 : 1. 설계변경 시행(방침서) 및 관련서류 각 1부.

2. 설계변경(최종) 내역서 1부. 끝.

	급수운영과장
주무관	손현정		급수설비팀장	代정헌석		급수운영과장	07/29 이자화
협조자
시행	급수운영과-14712	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	3146-4559	/전송	3146-4589	/		/	부분공개(7)