투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	총 무 과 장
(경유)
제목	품질시험 처리기한 연기 요청

1. 품질시험 처리기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기 요청 내용

시험번호	품질시험 처리기한		연기사유
	당초	변경
아-379	`15.07.20 ~ `15.07.30	`15.07.20 ~ `15.08.08	동적안정도 시험(KS F 2374) 장비 고장

끝.

	토질재료시험과장
주무관	문상묵		토질재료시험과장	07/30 代이강일
협조자
시행	토질재료시험과-3142	(		)	접수		(		)
우	137-140	서울 서초구 우면동 태봉로 131	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-3462-7213	/전송	02-3462-7210	/	pmhs2000@seoul.go.kr	/	대시민공개