준공기한 연기 보고

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	07/30 남정열

	명에 의거 담당 구역내 급수공사를 시행중 준공기한 연기 사항이 있어 보고합니다.
2015. 7. 31.
보 고 자 : 직 성명 : 지방시설주사보 양 봉 우

보       고       내       용

건    명

준공기한 연기 보고(개량-37 ***********)

내용

1. 위   치 : ***************

2. 작업지시 번호 : 37

3. 급수공사 종별 : 개량

4. 보고내용

작업 지시	위 치	수요가 연기사유	당초	1차 변경
개량 37	***********	7월18일부터 일주일넘게 지속된 장마로 급수공사기간 연장.	2015. 7. 23. ~2015. 7. 31.	2015. 7. 23. ~2015. 8. 12.

5. 조치의견

- 상기 위치의 급수공사 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자합니다.

6. 지체상환금 부과여부 : 미부과

비  고