투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기요청

우리본부에서 시행하는 “강남순환도시고속도로4공구 시점부 지하차도 보완설계 용역” 에 대하여 준공기한 연기하고자 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 시점부 지하차도 보완설계 용역

2) 용역기간 : 2014. 8. 1. ~ 2015. 7.30.

3) 용 역 비 : 금490,000,000원

4) 용역업체 : ㈜서영엔지니어링 대표 박광준

나. 준공기한 연기

1) 당초 : 2014. 8. 1. ~ 2015. 7.30.

2) 변경 : 2014. 8. 1. ~ 2015.12.31.

다. 연기사유 : 붙임 내용 참조

붙 임 : 1. 준공기한연기 검토보고서  1부.

2. 준공기한연기 의뢰서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	남덕희		도시고속도로과장	07/30 명경출
협조자	주무관	시희식
시행	토목부-15750	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8, 12층(무교동, 프리미어플레이스빌딩)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/	heedeok@seoul.go.kr	/	부분공개