서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(사)새로운 문화를 실천하는 건축사협의회 귀중
(경유)
제목	서울역고가 프로젝트 국제현상 공모지침 및 관리용역 준공기한 연기 알림

1. 새건협고가 15-73호(2015.06.29.)와 관련입니다.

2. 우리 시에서 시행 중인 「서울역고가 프로젝트 국제현상 공모지침 및 관리용역」에 대한 준공기한 연기 요청에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하였음을 알려드리오니   변경계약을 추진하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 「서울역고가 프로젝트 국제현상 공모지침 및 관리용역」

나. 계 약 자 : (사)새로운 문화를 실천하는 건축사협의회

다. 준공기한 연기 내역

구분	당 초	변 경	증⦁감	비고
국제현상 공모지침 및 관리용역	‘14.11.10~’15.06.30	‘14.11.10~’15.07.31	증)31일

※ 계약기간 연장에 따른 계약금액 조정대상이 아님

라. 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	최연섭		사업계획팀장	권완택		재생사업반장	전결 06/30 이택근
협조자
시행	서울역일대종합발전기획단-1397	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 세종대로 110, 10층 서울역일대종합발전기획단	/
전화	02-2133-8665	/전송		/		/	부분공개(5)