시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	종로구청장(복지지원과장)
(경유)
제목	2015년 서울노인복지센터 기능보강사업 변경 승인 통보

1. 종로구 복지지원과-24013(2015.7.3.)호와 관련입니다.

2. 2015년 어르신복지시설 기능보강사업 보조금 지원시설에 대하여 다음과같이 변경승인하였음을 통보합니다.

가. 변경사업내역

세부사업	사업내용	사업비(원)	비고
	합 계	794,170,000
기능보강 설계 및 감리용역	본관,별관,분관 공사에 따른 설계 및 감리용역 실시	21,138,800	기집행액
분관 공사	분관 내부 건축 , 설계, 전기, 방송 등 공사	134,519,680	기집행액
분관 장비보강	내부 가구, 체력단련실 기구, 컴퓨터 구입 등	130,532,500	기집행액
본관(별관) 개보수	프로그램실 등 개보수	462,649,420	자치구 발주예정
본관(별관) 장비보강	본관 및 별관 프로그램실 증가에 따른 가구 구입	45,329,600

나. 승인 내용

- 보조금지원사업의 목적에 위배되지 않는 범위 내에서의 설계변경, 장비보강 목록 변경 사항.  끝

	서 울 특 별 시 장
주무관	이철욱		어르신시설팀장	代서세환		어르신복지과장	07/31 하영태
협조자
시행	어르신복지과-1997	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 신청사4층	/
전화	02)2133-7425	/전송	02)2133-0720	/	ebawoo@seoul.go.kr	/	대시민공개