문서번호	시설계획과-2554
결재일자	2014.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기반시설계획팀장	시설계획과장	도시관리정책관		도시계획국장
김영일	강호광	김학진	류훈		03/11 이제원
협 조

일반용역 준공기한 연기 보고

- 도시계획시설 노후 고시도면 복원 및 전산화 -

2014. 3

도시계획국

(시설계획과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

일반용역 준공기한 연기 보고

- 도시계획시설 노후 고시도면 복원 및 전산화 -

노후․훼손된 도시계획시설 고시도면의 복원 및 전산화를 위한 용역 진행과정에서 일부 도면 복원작업에 많은 시일이 소요됨에 따라 준공기한을 연기해 복원작업에 만전을 기하고자 함

용역개요

용  역  명 : 도시계획시설 노후 고시도면 복원 및 전산화 용역

계  약  자 : ㈜한국지오매틱스, 미림표구

계 약 금 액 : 일금 일억일천삼백사십팔만육천일백이십원정(₩113,486,120)

계약년원일 : 2013. 11. 5.

준공예정일 : 2014. 3. 31.

그간 추진사항

2013.11. 5 : 계약 및 착수

2014.11.14 : 착수보고

2014. 1.10 : 도서반출 및 분류작업

2014. 1.22 : 진행사항 현장점검

2014. 2월  : 현장점검 사항에 대한 조치계획 검토

준공기한 연기 내용

연기기한 : 2014. 4.30.(1개월 연기)

귀책사유 : 서울특별시

지체상금 부과여부 : 미부과

연기사유

- 대형도면 및 훼손이 심한 도면의 복원작업에 상당한 시일이 추가로 소요됨에 따라 과업수행에 필요한 용역기간 부족으로 기간연장 필요

〔손상이 심한 대형도면〕          〔테이프 제거 작업에 많은 시일 소요〕

향후 추진계획

충실한 과업수행을 위하여 준공기한 연기는 불가피할 것으로 판단되는 바, 재무과에 준공기한 연기(2014. 3.31 → 2014. 4.30)를 의뢰하고자 함.