보고서(급수공사 작업기한 연기)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
박상열	김태형	08/03 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-19904

광진구 상수도공사 감독업무 수행(************급수공사) 중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2015. 08. 03.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 박 상 열

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 광진구 상수도공사(장기계속공사)

주 소	수요가명	공사기간	지시번호	비 고
**************	***	`15.07.16. ~ 08.03.	교체장애-2

□ 연기요청사항

주 소	수요가명	연기요청 사유	공사연기 기간	요청인
**************	***	옥내굴착에 따른 작업일정 협의로 연기	`15.08.12.	장순옥

□ 검토결과

○ 옥내굴착에 따른 작업일정 협의로 인하여 공사기간 내 작업이 어려워 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

주 소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간	비 고
**************	***	`15.07.16. ~ 08.03.	`15.07.16.~`15.08.12.

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.