	구로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	구로소방서 승강기 설치 및 안전센터 보수보강공사 설계변경 요청사항 통보

1. 하웅종합건설(주) 하웅 15-24(2015. 7. 25.)호『구로소방서 승강기 설치 및 안전센터 보수보강공사 설계변경』 제출과 관련입니다

2. 위 공사 진행중 귀사에서 요청한 설계누락 및 119안전센터 사용부서의 요구사항

등에 따른 물량증가 부분에 대하여 변경사항을 관련규정에 의거 검토하시어 변경된 부분의 추가공사비 소요액 등 관련자료를 제출하여 주시고,

3. 아울러 소방업무의 근무여건을 감안 사무실 등 24시간 근무 중 일상생활에 필요한 시설에 대하여는 2015. 8. 30일 전 완료될 수 있도록 변경가능 부분에 대하여 선 시공하시고 결과를 아래서식에 의거 조속히 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 검토내용 : 설계변경사항 내용의 확인 및 검토

나. 제출서류(실정보고사항 포함)

○ 설계변경(전,후) 내용이 포함된 설계도서

○ 기준검토보고서

○ 설계변경내역서(계약금액기준 세부내역서) 등 관련서류 일체.  끝.

	구로소방서장
수신자	하웅종합건설(주),일광전력(주)
담당자	김현태		장비회계팀장	천완주		소방행정과장	전결 08/03 윤봉수
협조자
시행	소방행정과-10960	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 소방행정과	/
전화	2618-3103	/전송	2616-1919	/	act02@seoul.go.kr	/	대시민공개