문서번호	방재시설부-10416
결재일자	2015.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
조양호		윤방식	08/04 임춘근
협 조
	건축관리과장			곽동호
	환경설비과장			유병기
	조경시설과장			신용우
	주무관			김상용

『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』 설계변경(총괄13회, 6차3회, 7차1회) 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 08.

도시기반시설본부

방 재 시 설 부

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

설계변경(총괄13회, 6차3회, 7차1회) 검토

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 설계변경(총괄13회, 6차3회, 7차1회)에 대한 검토 보고임.

<관련근거> 도화(감리) 2015-10043호(2015.08.03)

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

❍ 공사규모 : 고도처리 115만톤/일, 시설현대화 36만톤/일 등

❍ 공사기간 : 총괄 2009.08.09 ~ 2016.02.28

6차  2014.08.29 ~ 2015.08.09

7차  2015.05.08 ~ 2015.12.31

❍ 공 사 비 : 총괄 284,423백만원(6차 21,288, 7차 26,986)

❍ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 외 1

❍ 시 공 사 : 대림산업(주) 외 5

□ 설계변경 주요내용

❍ 총괄계약

- 계약금액 조정 : 공사계약일반조건 제21조 제2항 제2호․제4항 제1호

․ 시설현대화 총인처리시설      증액 29,483백만원

※ 토목, 건축, 기계, 전기, 조경분야 등 전체 금액임.

․ 물가변동(1~4회)            감액   1,301백만원

․ 물가변동(5회) 총인처리시설   감액     368백만원

․ 계약금액

(단위: 백만원)

구 분	당 초	변 경	증·감
도급액	284,423	312,237	증 27,814

❍ 차수계약

- 3차처리시설(MDF) 삭제 및 총인처리시설(YDF) 반영

- 계약금액 內 증․감 합산 조정 : 공사계약일반조건 제21조 제6항

․실정보고 사항은 계약금액 내에서 증·감되는 금액을 합산하여 조정하되, 계약금액 증액은 없음

(단위 : 백만원)

금회 실정보고 내용	전회 누계	금회	전체 누계
- 소화조 가시설 어스앵커 추가설치 ⇒ 감 69 [방재시설부-5654호(2015.04.28)]	증 3,181	증 130	증 3,311
- 부력방지앵커 변경 ⇒ 증 167 [방재시설부-9184호(2015.07.10)] - 계측관리 변경 ⇒ 증 32 [방재시설부-9410호(2015.07.15)]

❍ 6차공사

<주요내용>

분야	내 용	조정금액 (백만원)	비 고
토목	- 소화조 가시설 어스앵커 추가 설치	당초 497 변경 432 감 65	방재시설부-5654호(2015.04.28.)
	- 부력방지앵커 길이변경	당초 49 변경 219 증 170	방재시설부-9184호(2015.07.10.)
	- 계측기 설치 및 관리기간 변경	당초 30 변경 31 증 1	방재시설부-9410호(2015.07.15.)
	- 6차, 7차 공종변경 ․ 3차처리시설 삭제 ․ 7차분 반영(분배수로, 반류수처리시설, 초기우수 저류조)	당초 11,760 변경 7,834 감 2,556	방재시설부-9886호(2015.07.23.)
	- 총인처리시설 추가 (토공, 가시설, 기초공)	당초 - 변경 1,937 증 1,937	방재시설부-608호(2015.01.15.)
기계 및 전기	-	당초 51 변경 51 증 -	변경없음

- 계약금액 조정

(단위:백만원)

구 분	당 초	변 경	증·감
도급액	21,288	21,288	변경없음

❍ 7차공사

<주요내용>

분야	내 용	조정금액 (백만원)	비 고
토목	- 6차, 7차 공종변경 ․6차로 변경(분배수로, 반류수처리시설, 초기우수처리시설, 생물반응조) ․장래분 추가(일차처리 및 초기우수처리시설)	당초 13,634 변경 10,838 감 2,796	방재시설부-9886호 (2015.07.23)
	총인처리시설 추가 (토공, 기초공, 구조물공)	당초 - 변경 3,407 증 3,407	방재시설부-608호 (2015.01.15)
	폐기물처리 수량 변경	당초 249 변경 132 감 117	방재시설부-10126호(2015.07.29)
기계	총인 역세척수 이송관로	당초 2,144 변경 2,307 증 163	방재시설부-608호 (2015.01.15)

- 계약금액 조정

(단위:백만원)

구 분	당 초	변 경	증·감
도급액	26,986	26,791	감 195

※ 폐기물처리 수량 변경에 따른 감액

❍ 공사기간

구분	당 초	변 경	비고
총괄	2009.08.09~ 2016.02.28	2009.08.09~ 2016.02.28	변경없음
6차	2014.08.29~ 2015.08.09	2014.08.29~ 2015.08.09	변경없음
7차	2015.05.08~ 2015.12.31	2015.05.08~ 2015.12.31	변경없음

□ 조치의견

❍ 총괄 - 13회

- 하수도법 개정에 따른 방류수질 강화로 인한 총인처리시설 증액 반영

- 물가변동(ESC) 정산에 따른 감액 반영

- 실정보고사항 승인에 따른 증□감 합산처리 반영

❍ 6차 - 3회

- 6차공사 기존 3차처리시설(MDF) 공정 삭제

- 총인처리시설(토공/가시설/기초공) 추가 반영

- 소화조 등 구조물공사 수량조정 및 차수이월 등

❍ 7차 - 1회

- 총괄 및 6차공사 변경에 따른 수량조정 및 차수이월

- 폐기물처리 수량 변경에 따른 감액 등

❍ 총괄․6차․7차공사 설계변경에 따른 계약기간 변경없음

❍ 책임건설사업관리기술자 검토의견대로 총괄(13회) 계약금액 증액과 6차 및 7차공사 내역을 변경하여 시행에 만전을 기하고자 함.

붙임  1) 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

2) 변경내역서(총괄-13회, 6차-3회, 7차-1회) 각 1부.  끝.