문서번호	시설관리과-6259
결재일자	2014.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	★주무관	시설관리과장		서부수도사업소장
강병국	천성훈	이자화		03/11 설동을
협 조
	주무관		양갑섭
	주무관		김홍준
	주무관		류동열
	주무관		권승계

설계변경(1차) 심의위원회개최 결과보고

(2013년 은평구관내 급수공사 건설폐기물 처리용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

시설관리과

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

□ 용역 현황

ㅇ 용 역 명 : 2013년 은평구관내 급수공사 건설폐기물처리용역(장기계속단가계약)

ㅇ 계약일자 : 2013년 7월 16일

ㅇ 용역기간 : 2013.7.18 ~ 2014.06.30

ㅇ 용역개요 - 당초 : 운반용역 - 1,871㎥  처리용역 - 4,119톤

- 변경 : 운반용역 - 1,389㎥  처리용역 - 3,221톤

ㅇ 용역금액 - 당 초 : 78,081,000원

- 변 경 : 78,081,000원

ㅇ 계약업체 : (주)인광씨앤티 대표 김형진, 동아공사(주) 대표 박종기

□ 설계변경 심의위원회 안건

ㅇ 물량변경 - 운반용역 :  482㎥ 감소

- 처리용역 :  898톤 감소

ㅇ 설계변경 사유(세부내역 별첨)

- 급수공사 및 누수복구 시행에 따른 폐기물량 증감

- 신규공종발생 : 폐아스팔트처리수수료(중간처리업체)

□ 계약금액 조정 내역

ㅇ 내역

(단위:원)

구분	차수	당초	변경	증․감	비 고
용역비	총공사부기금액	78,081,000	78,081,000	-
	1차	37,120,000	37,120,000	-
	2차(금차)	40,961,000	40,961,000	-

□ 조 치 의 견

○ 본건의 설계변경은 폐기물량 증․감 및 신규공종 발생에 따른 변경으로 계약상대자와 합의한 후 설계변경(1차)을 시행하고 변경계약 의뢰코자 함.

붙 임 : 1. 심의위원회 결정 의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계변경 요약보고서 1부. 끝.