투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	관급자재(인조잔디) 변경계약 의뢰

1. 관리과-10354(‘15.8.03) “변경계약 체결 알림-분뇨처리시설 유입저류조 증설 공사”호와 관련입니다.

2. 우리센터 “분뇨처리시설 유입저류조 증설공사”와 관련하여 아래 관급자재(조달, 3자단가)에 대해 변경계약을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 대상물품 : 관급자재구매(인조잔디)

나. 계약업체 : 주식회사 효성월드그린 (대표 김진수)

다. 변경사유 : “분뇨처리시설 유입저류조 증설공사” 준공기한 연장에 따른 납품기한 연장

라. 변경내역 : 납품기한 연장

○ 변경전 : 2015.8.17

○ 변경후 : 2015.9.25.끝.

	슬러지재활용과장
지방환경사무관대우	하병문		슬러지재활용과장	08/05 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-5968	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	대시민공개