문서번호	시설보수과-6563
결재일자	2015.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김영원		정재현	08/05 노영석
협조

보도벽체 표면보수(추가시공) 보고

(창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사)

2015. 8

북부도로사업소

시설보수과

보도벽체 표면보수(추가시공) 보고

(창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사)

우리사업소에서 시행중에 있는『창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사』의 보도 벽체 표면보수가 당초 엘리베이터 설치구간(이마트 방향)에만 시행토록 되어있으나 반대편 보도(삼성아파트쪽)의 도장상태가 불량하여 추가 시행코자 보고 드림.

공사현황

❍ 공 사 명 : 창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사

❍ 공사기간 : 2014. 11. 26. ∼ 2015. 8. 31.

❍ 도 급 액 : 742,258,700원

❍  공사개요  :  콘크리트암거(2.1×2.6)설치 26m, 엘리베이터 덕트설치 14m,

도로포장 31.4a, 보도포장 501㎡, 하수관이설 106m, 표면보수 810㎡

❍ 도 급 자 : 주식회사 고황 대표 정삼술

보고내용

❍ 창동지하차도 보행통로 구간 벽체 표면처리에 대해 당초 설계에는 엘리베이터 설치구간(이마트 방향)에만 시공토록 되어 있으나, 남측(삼성아파트쪽)의 보도 도장상태가 불량하여 함께 도장을 요구하는 민원이 제기되고 있는바 금회에 함께 시공(동일제품:리코)하여 시설물 내구성 증대 및 보행환경을 개선 코자 함.

- 물량변경 내역 -

공 종	규 격	단위	수 량		증,감	비 고
			당초	변경
그라인딩		㎡	764	1.498	증 734	액자 부착구간 제외
표면보수 (리코)		㎡	810	1,544	증 734

※ 개략공사비 : 35,000천원 증

❍ 현황사진

향후계획

❍ 추가되는 물량에 대해 시공사에 통보 시공토록 하고 공사비 증가 사항에 대하여는 추후 설계변경 시 반영 조치(이설비 활용). 끝.