투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(공원녹지정책과장)
(경유)
제 목	북서울꿈의숲 족구장 조성사업(조명시설 설치) 예산 추가 지원 요청

1. 공원녹지정책과-8572호(2015.05.29.) 및 중부공원녹지사업소 북서울꿈의숲관리사무소-5662호(2015.08.04.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진중인 『북서울꿈의숲 족구장 조성사업 조명시설 설치공사』시행중 안전사고 예방차원에서 조명시설 지주의 높이를 연장․설치해 달라는 족구협회회원들의 요구사항이 발생하여 이를 공사에 반영코자하오니 추가 예산을 지원하여 주시기 바랍니다.

가. 조명시설 설치공사 사업개요

1) 위    치 : 서울시 강북구 번동 산28-6 북서울꿈의숲 북측산림 내

2) 공사내용 : 족구장내 조명시설(조명탑 2곳, 분전반1개)설치

3) 공사금액 : 금10,167,260원

4) 사업기간 : 2015. 6. 15. ~ 8. 21.

나. 예산 집행현황

(단위:원)

사업명	예산현액	기배정액	원인행위	낙찰차액 (집행가능액)	설계변경 (증액)	부족액
북서울꿈의숲 족구장 조성사업	84,139,000	84,139,000	84,139,000	0	2,241,090	2,241,090

다. 추가 예산지원 요청액 : 2,241,090원

라. 추가 예산배정 요청 사유 : 강북구 족구협회 회원들의 조명시설 높이 연장 설치요청 사항을 반영

붙임 : 1. 실정사항 검토보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부. 끝.

	중부공원녹지사업소장
주무관	박도복		관리팀장	김환형		북서울꿈의숲관리사무소장	08/05 김상근
협조자
시행	북서울꿈의숲관리사무소-5684	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2289-4016	/전송	02-2289-4040	/		/	대시민공개