시  민

문서번호	시설관리과-12850
보존기간	년
결재일자	2015.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	기전팀장	시설관리과장
차경호	김충완	08/05 이계환
협 조

『청사 계약용량 변경에 따른』

전기안전관리대행 용역 설계변경 시행

2015. 7

북부수도사업소

(시설관리과)

『청사 계약용량 변경에 따른』

전기안전관리대행 용역 설계변경 시행

청사 전기실 한전 계약용량 변경에(당초 : 300KW ⇨ 변경 : 저압 200KW) 따른 전기안전관리대행 용역에 대한 설계변경을 시행하고자 함.

□ 관련근거

❍ 청사 전기실 전력설비 개량공사 추진〔시설관리과-5536(2015.4.16)〕

⇨ 한전전기사용신청 (당초: 특고압 300KW → 저압 200KW)

❍ 전기안전관리대행 용역협약서 제12조(수수료의 지급 및 지행)

⇨ 전기설비의 폐쇄 및 변경된 경우 설계변경 후 재계약 처리

□ 용역현황

❍ 건    명 : 2015년 전기안전관리대행 용역(장기계속공사)

❍ 계약금액 : 9,392,460원

품 명	규 격	수량 (개월)	노무비		비 고
			단 가	금 액
공릉배수지	0.38kv 80Kw	12	63,000	756,000	월1회
우이가압장	0.38kv 200Kw	12	74,000	888,000	월1회
상계가압장	0.38kv 200Kw	12	74,000	888,000	월1회
번동가압장	0.38kv 200Kw	12	74,000	888,000	월1회
수유가압장	0.38kv 200Kw	12	74,000	888,000	월1회
미아가압장	22.9kv 600Kw	12	228,000	2,736,000	월3회
사업소청사	22.9kv 300Kw	12	124,550	1,494,600	월2회
소 계				8,538,600
부가가치세				853,860
계				9,392,460

❍ 용역기간 : 2015.04.01. ～ 2016.3.31.(1년)

❍ 계약업체 : ㈜ 지에스이전력기술  대표 : 이태호 TEL: 02-980-3027

□ 설계변경 내용

❍ 청사 한전 계약전력 변경에(300KW → 200KW)에 따른 전기안전관리 대행수수료 계약금액 변경 추진

- 변경금액

구 분	당 초	변 경	증.감	비 고
계약금액	9,392,460	8,947,620	△444,840

- 변경내역(청사부분)

구 분	당 초	변 경	증.감	비 고
수전방식	특고압수전 (22,900V)	저압수전 (380V)
계약전력	300KW	200KW
수 수 료	124,550원/월	74,000원/월	50,550원/월	50,550*8개월*1.1=444,840원
점검주기	2회/월	1회/월

※ 수수료 변경은 당초 동일계약 금액으로 변경하고 변경일자는 2015. 8. 1

이후 점검부터 적용

□ 행정사항

❍ 전기안전관리대행 용역 설계변경 시행

- 변경내용

․ 계약금액

당    초 :  금9,392,460원(구백삼십구만이천사백육십원)

변    경 :  금8,947,620원(팔백구십사만칠천육백이십원)

․ 계약기간 : 변경없음

․ 변경사유 : 사업소 수전설비 및 계약전력 변경에 따른 전기안전

관리대행수수료 변경

❍ 2015.08.01부터 적용

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 전기안전관리대행 용역협약서 1부

3. 과업지시서 1부.

4. 합의서 1부.  끝.