문서번호	설비부-9560
결재일자	2015.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
조기성	임현근	08/05 박기형

『양천주민편익시설 증축 및 리모델링 기계설비공사(1차)』 설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

도시기반시설본부

설비부

양천주민편익시설 증축 및 리모델링 기계설비공사(1차)

설계변경 검토보고

양천주민편익시설 증축 및 리모델링 기계설비공사(1차)와 관련, 감리단으로부터 제출된 설계변경(공사내역조정) 요청사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

Ⅰ				관련근거

◦ 설비부 - 9393호(2015. 07. 31) : 기계설비공사 실정보고 승인 통보

◦ 양천2015-079호(2015. 08. 04) : 설계변경 내역서 제출

Ⅱ				공사개요

◦ 위    치 : 양천구 목동 900번지

◦ 공사규모 : 지하3층/지상3층, 연면적 5,841㎡

◦ 공사기간 : 2014. 12. 15 ~ 2015. 10. 14(1차)

◦ 도 급 액 : 2,321백만원(1차 계약금액 : 230,000,000원)

◦ 시 공 사 : 라신산업(주) 외 1 / 건설사업관리 : 엄앤드이종합건축사사무소

Ⅲ				검토내용

◦ 설계변경 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
공사내역 조 정	▷ 1차 공사 내역 기계 철거공사 1식 소화 철거공사 1식 - 공조덕트설치공사 1식	▷ 1차 공사 변경 내역 기계 철거공사 1식 소화 철거공사 1식 공조배관공사 1식 위생배관공사 1식	공조덕트설치공사 다음차 계약 반영

◦ 공사비 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
1차	230,000,000원	230,000,000원	공사금액 변경없음
총차	2,321,729,800원	2,321,729,800원

◦ 감리 검토의견

- 총차공사 변경 없이 현장 여건을 감안한 1차 공사 내역 조정으로 계약변경이 적정한다고 판단됨.

Ⅳ				보고자 의견

◦ 감리 검토보고 내용이 타당함으로 설계변경(공사내역 조정) 처리하고 관련부서(재무과)에 계약변경 의뢰하고자 함.

따로붙임 1. 감리 검토의견서.   1부.

2. 설계변경서 1부.         끝.