문서번호	방재시설부-10452
결재일자	2015.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수시설과장	방재시설부장
조동협		代이병환	08/05 임춘근
협 조

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

계측기 수량 및 계측기간 변경 검토 보고

2015. 8

도시기반시설본부

(방재시설부)

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

계측기 수량 및 계측기간 변경 검토 보고

사업계획변경 조정위원회 심의 결과에 따라 사업기간이 변경(24개월 연장)되고 가시설 점검통로 일부 제거에 따른 보완대책으로 계측기(경사계)를 추가 설치함에 따라 계측기 수량 및 계측기간이 변경되어 이에 대한 실정보고 검토임 ※ 관련근거 : 도림천(감) 2015-142호(2015. 7.30)

공사개요

○ 위    치 : 관악구 관악로1 서울대학교 내․외 및 주변

○ 규    모 : 빗물저류조 65,000㎥

- 서울대 내(공사완료) : 공대폭포 5,000㎥, 노천강당(버들골) 20,000㎥

- 서울대 정문 앞 : 40,000㎥

○ 공사기간 : ‘12. 1. 3 ~ ’17. 5.30

○ 총사업비 : 581억원

○ 시공사 / 사업관리 : 남광토건외 1 / 신명건설기술공사

보고내용

○ 사업계획변경 조정위원회 심의결과에 따라 공사기간이 변경됨에 따라 계측기간 연장(23개월)이 필요한 실정임

- 준공기한 : ‘15. 5.30 → ’17. 5.30(24개월 연장)

○ 서울대 정문 앞 가시설 점검 통로가 벽체 철근 조립시 저촉되어 일부 철거를 승인하였고 가시설 일상점검 보완대책으로 계측기(경사계, 3개소)를 추가 설치하므로 추가 비용이 발생됨

- 도급내역 증․감현황                                             (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감(△)	비고
직접공사비	331,343,534	597,699,718	266,356,184
제경비	107,556,466	195,400,282	87,843,816
도급공사비	438,900,000	793,100,000	354,200,000

- 계측기 설치현황

검토내용

○ 당초 계측에 대한 계약내역이 총계방식(이하 1식단가)으로 계약되어 있음

- 1식 단가 산출내역 : 설치비 / 측정 및 정리 / 분석비 / 계측장비손료 등으로 구성

※ 공사계약일반조건 제7절 1식단가의 구성내용이 변경되는 때에는 계약금액을 조정함

○ 공사계약 일반조건에 의거 기존 계측기의 기간연장에 따른 내역변경은 기존 계약된 1식단가를 풀어서 설치비를 제외한(측정 및 정리 / 분석비 / 계측장비손료 등) 후 계약단가에 증가된 수량을 반영함

○ 추가 설치되는 계측기(경사계, 3개소)는 신규단가(설치비 / 자동화 계측 운영시스템 구축비 / 계측관리 등, 견적반영)를 적용함

보고자 의견

○ 사업계획변경 조정위원회 심의결과 및 현장여건 변경에 의한 추가 계측기 설치로 공사계약일반조건 제7절에 의한 변경에 해당되며

○ 책임건설사업관리자의 검토내용이 적정하다 판단되므로 실정보고 사항을 승인조치하고 선시행 후설계 변경하고자 함

붙임 : 검토보고서 1부.  끝.