문서번호	설비부-9631
결재일자	2015.8.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김두환		유병기	08/06 박기형
협 조

- 겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사 -

교량 연결램프(동대문구측) 구간 가로등 추가 이설 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 08.

도시기반시설본부

설 비 부

- 겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사 -

교량 연결램프(동대문구측) 구간 가로등 추가 이설 검토 보고

공사진행 중 겸재교량 연결램프(동대문구측) 구간에 1차로 추가 확보 및 보도 이설 사항 발생으로 기 설치된 가로등 추가 이설 조치가 필요함에 따라 다음과 같이 검토 보고 드림.

※ 가로등 추가 이설(당초 13본 → 변경 19본)

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명  : 겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사

□ 공사위치  : 서울시 동대문구 휘경동(한천로) ～ 중랑구 면목동(동2로)

□ 공사규모 : 본교량(B=20m, L=235m), 접속교량(B=15m, L=160m), 도로확장(L=750m)

□ 공사기간 : 총차 2010.02.05.～2015.12.31(5차 2015.02.13～2015.12.31)

□ 도 급 비 : 총차 금671,056,000원(5차 금230,040,000원)

Ⅱ		관련근거

□ 설계변경(램프 구간 가로등 추가 이설) 발생에 따른 실정 보고

□ 동일(겸재)감 제15-181호(′15.08.05)

Ⅲ		램프 구간 가로등 이설 추가 발생 내용

□ 발생 사유

□ 서울특별시 지방경찰청의 교통안전시설 심의결과에 의거 램프 구간에 1차로 추가 확보 및 보도 이설 사항 발생으로 공사 구간에 위치한 기존의 가로등 시설물 추가 이설이 필요함.

□ 발생 규모

구분	규격	변경전	변경후	증 감	비 고
가로등 이설	H 10m	13본	19본	증)6본	동대문 구청(장안벚꽃길)

□ 추가 소요예산 : 약 7,370천원(순공사비)

Ⅳ		기타 발생 내용

□ 교량 방음형 터널내 미관을 고려한 소화기함 크기 조정(2개용→1개용)필요에 따른 소화기 수량 변경 발생

□ 변경 내용

구분	규격	변경전	변경후	증 감	비 고
소화기	분말 3.3㎏	16개	8개	감)8개
소화기함	2개용	8개	0개	감)8개
소화기함	1개용	-개	0개	증)8개

□ 변경 금액 :  감)약 1,154천원(순공사비)

Ⅴ		보고자 조치의견

□ 교량 연결램프 구간 추가 가로등 이설 발생과 방음형 터널내(內)소화기함 크기 변경에 대한 책임감리원의 검토 보고가 적합하다고 판단되므로 감리단에 변경 승인 통보 토록하고 향후 설계변경(정산) 조치하고자 함.

□ 설계변경 예정금액

구분	도 급 비			비 고
	변경전	변경후	증 감
전체	671,056,000원	680,857,000원	증)9,801,000원	계약금액 증액

Ⅵ		향후 계획

□ 2015.08 : 설계변경 승인통보(도시기반시설본부→감리단)

□ 2015.09 : 설계변경 시행 및 재계약(도시기반시설본부→재무과)

□ 2015.12 : 공사준공(5차분)

따로붙임 : 책임감리원 검토의견서 1부. 끝.끝.