문서번호	도시철도사업부-7034
결재일자	2015.8.6.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		경전철2과장	도시철도사업부장
신정		최광무	08/06 권영찬
협조

〓 우이-신설 도시철도 민간투자사업 〓

휴일 감리단 근무계획 승인 검토 보고

2015. 8.

도시철도사업부

휴일 감리단 근무계획 승인 검토 보고

우이∼신설 도시철도 민간투자사업(1공구)의 휴일 감리단 근무계획 승인 요청에 대한 검토 보고 임.

휴일근무 요청내역

○ 관련근거 : 평감(우이) 제2015-399호(2015. 8. 3)

○ 휴일 근무일자 : 2015. 8. 8(토)

휴일근무 계획

○  관련근거

- 입찰안내서 제6장 6.2.3 휴일 근무요령

- 책임감리 현장참여자 업무지침서 제5조제3항(감리원의 근무수칙)

○ 근무사유

- 차량기지의 환기구 및 정거장 구조물 시공의 품질확보 및 안전시공, 공정관리를 위해 감리원을 근무토록 하고자 함

○ 휴일근무 주요내용

공구명	작업일자	작업위치	작업내용	관리자 (감리단)
우이신설 1공구	8월8일(토)	차량기지	- 차량기지 되메우기 - #1환기실 벽체 거푸집 조립 및 해체 - 도시가스, 통신관로 하부 토공 다짐	위호진 이사
		L01정거장	- 기능실 슬래브 방수 - 2SP 1단 버팀 해체
		LO1E환기구	- 지장물 복구
		본선2구간	- 12~15SP 2단 벽체 측벽 되메우기 - 10~11SP 1단 버팀보 해체	문형식 부장
		L02정거장	- 기능실 B동 복공판 및 주형보 해체
		L03정거장	- 승강장 동바리 및 슬래브 벽체 철근조립 - 배수턱 거푸집 설치

○ 감리단의 휴일 작업 승인조건

- 휴일 작업 시행 2일전 작업세부계획 수립하고 공사관리의 공백이 발생하지 않도록 근무자 정위치 배치하시기 바랍니다.

- 지하매설물 관련 규정을 숙지하여 이행하고, 안전수칙을 지켜 안전사고가 발생하지 않도록 공사장 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

- 위험한 작업의 내포 또는 지장물 등의 근접작업으로 유관기관의 입회가 필요할 경우 평일 주간에 시행하시기 바랍니다.

- 휴일 작업시 감리원은 1~2인 탄력적으로 근무하되, 감리비는 시공사 부담입니다.(입찰안내서 제6장 6.2 규정에 따라 원인자 부담)

조치계획

○ 감리단의 휴일 근무에 대하여 작업의 연속성과 지연공정 만회 등 공사관리에 만전을 기할 수 있도록 다음과 같이 승인코자 함

□ 공사의 안전, 품질, 공정관리를 위해 만전을 기하고자 하며

□ 감리원의 휴일근무 대가는 시공사 부담으로 함.

붙  임 : 관련 서류 1부.