문서번호	역사문화재과-5645
결재일자	2014.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	문화재정책팀장	역사문화재과장		문화체육정책관
황향선	조완석	황요한		03/12 황치영
협 조

2014년도 종묘광장 정비사업 시행 계획

2014. 3.

문화관광디자인본부

(역사문화재과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	종로구	)		무 □

2014년도 종묘광장 정비사업 시행 계획

세계문화유산으로 등록된 종묘(사적 제125호) 정문 앞 종묘광장에 음주가무 등 무질서 행위가 만연하여 세계문화유산 등록이 취소될 상황에 처함에 따라 종묘의 역사문화환경을 보호하기 위하여 종묘광장 정비사업 추진

□ 사업개요

○  사업위치 : 종로구 훈정동 2번지 일대

○  사업규모 : 34,600㎡ (도시계획시설 : 광장)

○  사업기간 : 2007 ~ 2015.12

○ 총사업비 : 7,000백만원(국비 4,900, 시비 2,100)

○  사업내용

- 원형복원

․어도 및 어구(L=129m, B=21.8m)

․종묘전교(L=7.2m, B=9.9m)

․제생동천(L=40.1m, B=3m, D=1.3m)

․하마비

․앙부일구

- 우수관로 정비

․BOX수로관(1.5×1.5) 해체 L=133m

․PC BOX(1.8×1.2)   신설 L=278.6m

- 신성림 조성

- 한옥관리동 신축

□ 연도별 집행계획                                    (단위 : 백만원)

구 분	총 사업비		2012			2013
	당초	변경	총 액	예산액	이월액	총 액	예산액	이월액
계	7,000		1,620	1,620		3,620	2,000	1,620
시설비	5,565		1,620	1,620		3,269	1,649	1,620
감리비	70					70	70
설계비	50
발굴조사비	665					265	265
기 타	650					16	16

구 분	2014			2015
	총 액	예산액	이월액 (3월말 확정)	총 액	예산액	이월액
계	2,139	1,000	1,139	2,380	2,380
시설비	1,269	200	1,069	2,096	2,096
감리비	70		70
설계비				50	50
발굴조사비	400	400
기 타	400	400		234	234

□ 추진현황

○ 2007년 : 국악정 철거

○ 2008년 : 노점상 정비, 발굴조사

○ 2009년 : 발굴조사, 기본 및 실시설계 용역착수

○ 2010년 : 발굴조사 완료, 염상섭상 이전

○ 2011년 : 기본 및 실시설계완료 및 설계심의(문화재청)

○ 2012년 11월 : 설계도서 심의 및 승인(문화재청), 계약심사(서울시)

○ 2012년 12월 : 건축, 토목분야 공사계약

○ 2013년  5월 : 조경분야 공사계약

○ 2013년  8월 : 어구부분 발굴조사

□ 2014년도 추진계획

○ 사업대상

-  어도부분 정밀발굴조사, 서측조경공사부분 시굴조사

- 상하수도, 통신관로 이설

- 어도 및 어구부분 공사완료

○ 사 업 비 : 1,000백만원(국비 700, 시비 300)

- 예산과목 : 역사문화유산의 계승 발전, 문화재 보존 복원, 종묘광장 정비, 시설비

○ 집행계획

- 발굴조사 : 400백만원

- 이 설 비 : 400백만원

- 어도 및 어구공사 : 200백만원

○ 추진일정

-  3월 : 사업비 교부

-  3월 : 어도부분 정밀발굴조사, 서측조경공사부분 시굴조사 발주

-  5월 : 발굴조사완료 및 설계반영

-  6월 : 상하수도, 통신관로 이설

- 12월 : 어도 및 어구분분 공사완료

○ 사업시행 : 종로구로 예산 재배정하여 사업비 집행

※ 2015년도 계획

▸ 사업내용 : 신성림 조성 및 산책로 포장, 한옥관리동 신축, 조형물 이설 등

▸ 소요예산 : 2,380백만원

□ 행정사항

○ 국고보조사업 정비지침(문화재청) 준수

○ 종묘광장 정비사업 자체계획 수립

○ 사업 추진사항 보고

참고자료

▣ 총사업비 산출내역                                (단위 : 백만원)

구 분	계	2012	2013	2014	2015	비 고
계	7,000	1,620	2,000	1,000	2,380
건 축	1,860	1,620	-	200		어도,어구,어정,종묘전교,제생동천 등 원형복원
토 목			40	-		우수관로 및 배수로 정비
조 경	3,051		1,432		1,619	신성림 조성 및 산책로 포장 등
전기․통신	322		177		145	공원등,cctv,방송설비 등
설 계 비	50		-		50	한옥관리동 설계
감 리 비	70		70		-	건축, 조경
발굴조사비	665		265	400		어도부분 발굴조사
폐기물처리비	50		16		34	건축․토목, 조경
이설비 (조형물)	600		-	400	200	화합과전진등 조형물 이설 ※상수도관로 및 통신관로 이설
한옥관리동	332				332	한옥관리동 신축